국민이 행복한 변화가 시작 됩니다!

	보 도 자 료	http://www.msip.go.kr
2014. 5. 9(금) 석간(온라인 5. 9. 08:00)부터 보도하여 주시기 바랍니다.
문의 : 과학벨트기반조성팀 홍순정 과장(02-2110-2770), 이민규 사무관(02-2110-2743)

기초과학연구원/중이온가속기 건립계획 확정

- 과학벨트 내 핵심 기초연구시설 건립을 위해 2021년까지 1조 6,662억원 투자 -

-‘14.5월 중 기초과학연구원 본원/중이온가속기 건립을 위한 설계공모 착수 -

□ 미래창조과학부(장관 최문기)는 ｢제6차 국제과학비즈니스벨트위원회｣를 개최(‘14.5.9)하여 과학벨트 내 핵심 기초연구시설 건립을 위한  ｢기초과학연구원/중이온가속기 건립계획(안)｣을 심의‧의결하였다.

○ 이에 따라, 2011.11 설립 이후 제대로 된 연구공간*이 없이 연구단 선정·운영에 제약을 받아왔던 기초과학연구원이 안정적 연구환경을 갖추어 본격적으로 세계적 석학을 유치하고 글로벌 기초연구를 수행할 수 있는 기반을 마련하게 되었다.

* KT 대덕연구센터(대전시 전민동 소재)에 연구공간을 임차하여 운영 중

○ 또한, 지난해 미래부-대전시 업무협력(MOU)(‘13.7)를 통해 정상화된 과학벨트 조성사업이 핵심인프라 시설·단지 등의 건립일정, 사업규모 등을 확정하고 본 궤도에 오를 수 있게 되었다.

□ 기초과학연구원/중이온가속기는 2021년까지 총 1조 6,662억원*을 투입하는 대규모 국책사업으로 과학벨트 거점지구 내 연구·산업·정주시설 등과 기능적·지역적으로 연계조성되어 ’창의적 지식생태계‘의 핵심시설로 건립될 예정이다.

* 중이온가속기 장치구축 사업예산 4,602억원은 미포함

【 기초과학연구원 본원 】

○ 엑스포 과학공원(도룡지구, 부지 약 26만㎡)내에 위치할 기초과학연구원 본원(건축면적 약 11.3만㎡)은 과학벨트 거점지구의 랜드마크로서 선도적 디자인과 첨단 연구시설·편의 휴식공간이 조화를 이룬 스마트한 연구시설단지로 건립된다.

○ 기초과학연구원 단지와 여러 시설물들은 연구수행이나 보안이 필요한 연구공간 등을 제외하고 관련연구기관 연구자, 학생, 지역주민 등에 개방․활용 될 수 있도록 건립․운영 될 예정이다.

○ 2017년까지 연구동, 행정·교류시설, 게스트하우스 등을 중심으로 1차 완공할 계획이며, 2021년까지 잔여 연구동, 행정시설 등 모든 시설물을 최종 완공할 예정이다.

【 중이온가속기 】

○ 신동지구(부지 약 98만㎡)에 위치할 중이온가속기(건축면적 약 13만㎡)는 세계적 최첨단 대형 연구시설단지로 조성된다.

○ 중이온가속기는 세계 최고수준의 희귀동위원소빔(200Mew, 400kw)을 제공하는 가속기로서 핵물리, 물성과학, 의생명 등의 글로벌 인재들이 함께 모여 공동연구를 수행함으로써 우리나라 기초과학 수준을 한단계 높일 것으로 기대된다.

○ 2019년까지 저에너지 가속기 관련시설을 1차로 건립하고 2021년까지 고에너지 가속기 관련시설을 건립할 예정이다.

【 기초과학연구원 캠퍼스 】

○ 5개 특성화 대학*에 분산 건립되는 캠퍼스(약 12.8만㎡)는 인근 대학·연구기관의 기초연구역량을 강화하고 우수연구인력 유치의 거점으로서 연구단 선정 현황 등과 연계하여 2021년까지 순차적으로 조성된다.

* KAIST 연합, GIST, D·U·P(DGIST, UNIST, POSTECH)

□ 기초과학연구원 본원/캠퍼스/중이온가속기 등 모든 시설단지는 ″설계․시공 분리″ 발주 방식으로 발주되며, 그 중 우선 건립이 필요한 기초과학연구원 본원과 중이온가속기 특수시설동(가속기장치동, 실험연구동)은 금년 상반기 중 조달청 입찰 공고를 시작으로 사업에 착수한다.

○ 본원은 ‘14.5월 중순 “설계공모(현상설계)” 방식으로 설계사를 공모․선정할 예정으로 ’14.10월부터 약 1년간 기본/실시 설계가 진행되며, 본원 건립을 위한 엑스포과학공원 철거공사는 금년 3분기 중 착공되어 ‘15년 본원 설계가 마무리되기 이전에 완료될 예정이다.

○ 중이온가속기 특수시설은 ‘14.6월경 “적격심사(PQ+TP )입찰”방식으로 설계사를 공모․선정할 예정이며, 설계자 선정이후 기본설계(약 1년)와 실시설계(약 1년)를 분리 추진한 다음 신동지구 부지 사용*이 가능한 ’16년 하반기에 착공할 예정이다.

* 신동․둔곡 개발․실시계획(‘14.하) →토지보상(’14.말～‘15.말) → 신동지구 기반조성공사(’15.말～‘16.말)

□ 그간 미래부는 기재부(KDI) 사업계획 적정성 검토(‘12.7～’14.1월), 총사업비 협의(‘14.1～4월)을 거치고 건축자문위원회 자문(3회)를 받아 건립계획을 수립하였다.

○ 앞으로 미래부는 기초과학연구원/중이온가속기가 과학벨트의 핵심시설이자 세계적 기초연구  거점으로서 차질 없이 조성 될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정이다.

붙임 : 기초과학연구원/중이온가속기 건립계획(안) 요약 1부.

붙임		기초과학연구원/중이온가속기 건립계획(안) 요약

1. 배경 및 필요성

○ 과학벨트를 세계적 과학혁신클러스터로 발전시키기 위해 기초과학연구원/중이온가속기를 지역 랜드마크화 필요

※ 막스플랑크연구소는 독일 드레스덴이 과학비즈니스도시로 성장하는데 주도적 역할

○ 과학벨트 기초연구거점으로서 기초과학연구원을 설립‧운영(‘11.11) 중이나, 연구공간이 마련되지 않아 연구수행 및 인재유치에 제약

※ 본원 및 중이온가속기(대전KT연구소 임차), 캠퍼스(특화대학내 임시공간 사용)

○ 우수인력 유치와 창의적 연구환경 조성을 위해 연구․교류․편의⋅휴식 공간이 통합된 ‘스마트 캠퍼스’형 공간조성이 필요

2. 건립목표 및 방향

3. 사업 개요

○ 기간 : 2014 ~ 2021년 (8년간)

* 본  원 : ‘17년 1차 완공(9개 연구동, 행정시설, 부설 수리연 포함),  ’21년 2차 완공(추가 연구동, 행정시설)

* 가속기 : ‘19년 1차 완공(저에너지 가속기 관련시설), ‘21년 2차 완공(고에너지 가속기 관련시설)

○ 부지 : 총 1,383,480m2 (본원  : 도룡지구, 캠퍼스  : 5개 특성화대*, 가속기 : 신동지구 등)

*  KAIST연합, GIST, DIGIST, UNIST, POSTECH

※ 본원․캠퍼스 부지는 대전시와 각 특화대학에서 제공  / 중이온가속기 부지는 정부매입

○ 건축규모 : 370,497㎡

○ 총사업비 : 1조 6,662억원 (부지매입비 3,600억 포함)

○ 시 행 자 : 미래창조과학부(본원, 캠퍼스, 가속기 일반시설) / 기초과학연구원(가속기 특수시설*)

* 가속기 특수시설 : 가속기터널․활용실험시설․제어동 등 방사선인허가가 필요하고 가속기장치 구축사업과 긴밀한 연계가 필요한 시설

< 기초과학연구원 건립 계획 안 >

구 분		부지규모	건축면적	사업비	비 고
전 체		1,383,480㎡	370,497㎡	16,662억
기초과학연구원	본원	259,769㎡	112,740㎡	3,268억	과학벨트 도룡지구 (대전시 부지제공)
	캠퍼스	144,390㎡	127,500㎡	3,551억	5개 특성화대 본교 내 (각 대학 부지제공)
중이온 가속기	특수시설	979,321㎡*	99,682㎡	4,641억	과학벨트 신동지구 (정부 부지매입)
	일반시설		30,575㎡	5,202억

* 중이온가속기 장치구축 사업예산(총 4,602억원)은 건립기본계획(부지매입비 3,600억원 포함)에 미포함

4. 발주 방식

○ 과학벨트의 상징성․특수성을 고려하고 발주청․연구원․연구자 등의 다양한 의견이 반영될 수 있도록 “설계․시공 분리” 방식으로 발주

- 설계자/시공자는 각 공구별 특성을 반영하여 평가․선정

○ 감리는 대규모 국책사업임을 고려 건설사업관리(CM) 적용

< 설계․시공자 선정 방식 >

구 분		설계자	시공자	비 고
기초과학 연구원	본 원	설계공모	일반입찰 (제한방식)	∙과학벨트 랜드마크로서 선도적 디자인을 갖춘 스마트건물로서 설계․시공 ∙연구원 설계․시공경험이 있는 우수업체 선정
	캠퍼스	설계공모 또는 적격심사 (PQ+TP+입찰)	일반입찰	∙5개 캠퍼스 유치대학의 의견을 반영하여 설계·시공
중이온 가속기	특 수 시 설	적격심사 (PQ+TP+입찰)	일반입찰 (제한방식)	∙가속장치 구축과 연계하여 탄력적 설계․시공 ∙원자력, 방사선 시설 등 특수시설 시공능력 보유업체 선정
	일 반 시 설	설계공모	일반입찰 (제한방식)	∙과학벨트 신동․둔곡지구 랜드마크로서 첨단대형연구시설단지로 조성 ∙연구시설단지 조성경험이 있는 우수 업체 선정

5. 건립일정

※ 캠퍼스 건립일정은 캠퍼스 연구단 선정 현황 및 캠퍼스 시설운영방안 등과 연계하여 검토․추진

별첨		기초과학연구원/중이온가속기 조감도 (예시)

※ 아래 조감도는 이해를 돕기 위한 단순참고용으로, 실제 건립은 설계 공모를 거쳐 추진예정

□ 본원

조 감 도
배 치 도
부 분 투 시 도

□ 중이온가속기

조 감 도
배 치 도

□ 캠퍼스

KAIST 연합 캠퍼스
POS- TECH 캠퍼스

DIGIST 캠퍼스
UNIST 캠퍼스
GIST 캠퍼스